문서번호	교통운영과-21666
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
강민우		고광섭	11/09 代서인석
협조

『교통신호제어용 차량검지기』원인자공사 2차 작업기한 연장요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

『교통신호제어용 차량검지기』원인자공사 2차 작업기한 연장요청 검토보고

교통신호제어용 차량검지기 유지보수(연간단가) 원인자2차공사 작업기한 연장요청이 있어 검토 후 처리계획을 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 원인자 2차 시행보고 ⌜교통신호제어용 차량검지기⌟유지보수

[교통운영과 -18515(2016.09.30.)호〕

❍ 교통신호제어용 차량검지기 유지보수 공사(원인자 2차) 작업지시

[교통운영과 -19788(2016.10.17.)호〕

❍ 교통신호제어용 차량검지기 (원인자공사 2차) 연장요청                         신한네오텍[신내20*******01(2016.11.09.)호]

□ 공사개요

❍ 공사명 : 교통신호제어용 차량검지기 유지보수공사(연간단가)원인자 2차 작업지시

❍ 계약업체 : ㈜신한네오텍 대표 강미순

❍ 공사장소 : 퇴계로4가 등 6개소

❍ 공사금액 : 금33,700,000원

❍ 작업기간 : 2016.10.18.~2015.11.11.

□ 연장사유

❍ 영하의 기상상황 및 현장 작업장비 파손으로 인한 장비 재구매(제작시간 소요)로 인한 준공기한 연장 요청함

□ 검토결과

❍ 현장 작업장비 파손으로 인한 장비를 재구매 등으로 대체보완하여 공사진행하고자 작업기간을 연장 승인하고자 함.

❍ 승인 연장기간 : 2016년 10월 18일 ~ 11월 17일.

붙임 : 1.작업기간 연장요청 문서 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.