문서번호	도로보수과-10845
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	11/10 신응수
협조

광화문광장 차도구간 정비 검토

2016.  11.

북부도로사업소

(도로보수과)

광화문광장 차도구간 정비 검토

Ⅰ		사 업 개 요

○ 위    치 : 세종로(세종로 사거리 ~ 세종문화회관)

○ 시공규모 : 연장 550m, 면적 229a

○ 포장단면 : 28cm (기층 16, 중간층 7, 표층5)

○ 포 장 재 : 기층 BB-2, 중간층 Wc-3, 표층 개질SMA

※ 2016년 정비계획

- 위  치 : 세종로사거리~세종문화회관, 89.5a(약 240m)

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2016.9.2.  : 광화문 차도정비방안 회의 개최

- 광화문광장 차도구간 연내 정비 방안 (부시장님 지시사항)

- 참석자 : 도로관리과장, 보도환경개선과 팀장, 종로구 도로과장,

북부도로보수과장, 동일기술 공사, 도기본 토목부 담당자,

○ 2016.9.12. : 계약심사 의뢰 (공사, 관급자재, 폐기물 처리용역)

○ 2016.9.22. : 계약심사 재요청(공사규모 축소 229a→89.5a)

○ 2016.9.26. : 하반기 노후포장도로 정비계획 통보

- 광화문 차도구간 정비 예산 재배정 : 980백만원

○ 2016.9.29. : 하반기 추가 재배정 예산 집행 계획 수립

- 광화문 차도구간 정비공사 신규 발주

○ 2016.9.30. : 공사 발주 및 관급자재 구매

○ 2016.10.4. : 건설폐기물 운반 및 처리용역 발주

- 낙찰하안선 미달 및 응찰자 없음으로 유찰 2회 유찰

○ 2016.10.24. : 광화문 차도구간 건설폐기물 처리계획 수립(수의계약)

○ 2016.10.25. : 건설폐기물 운반 및 처리용역 계약

○ 2016.10.26. 도로공사 신고서 제출. (종로경찰서)

- 도로공사시간 제한 의사 : 23:00 ~ 익일 06시까지 공사 허용

○ 2016.10.31. : 교통 규제 협의 완료(종로경찰서 방문 협의)

- 광화문 광장 집회로 10.13. 이후 공사 허용(21:30~익일 06:30)

Ⅲ		문 제 점

○ 금년도 계획 물량을 정비하기 위한 절대공기는 14일이나 공사 가능 일수는 약 10일 미만으로 예측되며 (최저기온 5℃ 이상)

○ 시국 불안정에 따른 집회 지속시 공사 가능 일수가 불확실한 실정으로

○ 금년도 계획 구간(세종로사거리~세종문화회관)정비가 어려움 예상

Ⅳ		대 책

○ 11월 기온 검토 결과 향후 공사 가능 일수가 10일 미만으로 예측되며

시국 불안전에 따른 집회 등으로 더 줄어들 것으로 예측됨

○ 광화문광장의 중요성을 감안할 때 도로 품질 확보를 위하여 사고이월 후 내년도에 공사를 시행함이 타당 할 것으로 판단됨. 끝.

※ 참고자료

○ 11월 최저기온 5℃ 이상 일수 현황

연도	2016	5년평균	2015	2014	2013	2012	2011
1일~12일	5	9.0	11	8	8	6	12
13일~30일	?	5.8	11	10	1	0	7

○ 기상청 중기 예보 (10일 예보)