문서번호	서울숲공원관리사무소-5975
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재	김완수	11/10 윤학수

공사기간연장 시행 보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

2016. 11

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

공사기간 연장 시행 보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

우리공원에서 시행 중인「서울숲공원 제비서식처 조성공사」와 관련하여 공사기간연장을 아래와 같이 시행코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲공원 제비서식처 조성공사

❍ 공사기간 : 2016. 10. 28~ 11. 16

❍ 총공사비 : 금35,666,000원

(도급액 : 금33,680,000원/관급자재1,986,000원)

❍ 공사개요

- 논습지조성 300㎡, 전기줄 설치 등

❍ 도 급 자 : ㈜청신종합조경 대표 손신자

Ⅱ		공사기간 변경

❍ 당초 : 2016.10.28. ~ 2016.11.16.

❍ 변경 : 2016.10.28. ~ 2016.11.30.(14일 연장)

- 변경사유 : 논조성 대상지는 진흙인 습지로 우기시 장비진입 및  작업이 어려운 곳이나 공사기간중 비오는 날이 많아 공사 대상지 물빠짐 등에 많은 시간이 소요되어 불가피하게 공기연장

Ⅲ		조치계획

○ 우천에 따른 공사기간 연장 시행→계약의뢰(공원운영과)  끝.