문서번호	도시철도토목부-14054
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	11/10 김진팔
협 조
	주무관			임경태

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사』

품질관리계획서 개정(1차) 검토보고

2016. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사』

품질관리계획서 개정(1차) 검토보고

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사』의 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 품질관리계획서 개정(1차) 승인요청에 대한 검토보고임

※ ㈜대한콘설탄트 대한(하남) 제16-618호(‘16.11.03)

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 동광교회~서울시계

○ 규    모 : 총 연장 1,819m(본선 471m, 입출고선 1,348m)

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30. ～ '18.07.26.

○ 시 공 사 : 쌍용건설㈜

○ 건설사업관리사 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

2		관 련 근 거

○ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술진흥법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립대상공사), 제90조(품질관리계획 등의 수립절차)

○ 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시 제2014-303호, '14.05.23)

○ 공사시방서 5장(품질관리)

3		주요 변경 내용

구 분	항 목	개정사항 검토		비 고
		변경사유	변경내용
제1장	건설공사 정보	- 계약내용 변경	- 공사금액 변경내용 삽입 ․당초 : 38,616백만원 ․변경 : 39,264백만원
제2장	현장품질방침 및 목표	- 품질방침 및 목표 누락	- 품질방침 및 목표 삽입
제3장	책임과 권한	- 조직도 변경	- 현장조직도 변경사항 반영 - 세부 업무분장 업무대행자 지정
제6장	자원관리	- 자원확보 및 유지관리사항 보완	- 자원확보 및 유지관리 사항 추가 - 기반구조 관리상태 점검계획 추가 - 세기반구조 관리상태 점검표 추가
제11장	의사소통 및 협의	- 의사소통 관리기준표 및 항목 누락	- 의사소통 관리기준표 및 항목 삽입
제12장	기자재 구매관리	- 기자재 수급계획 관리사항 등 재작성	- 주요자재 수급계획서 추가 - 자재공급원 승인요청결과 추가 - 공급원 승인대상 목록 추가 - 공장점검 계획표 수립 추가
제13장	지급자재의 관리	- 지급자재 수불부 누락	- 지급자재 수불부 추가
제16장	중점품질관리	- 중점품질관리 대상 및 장비․작업자 자격기준 설정	- 중점 품질관리 공사 작업자 자격부여 평가서 추가 - 중점 관리대상 공정 조정
제17장	식별 및 추적관리	- 기자재 유형별 관리방안 누락	- 기자재 유형별 관리방안 추가
제24장	자체 품질점검	- 자체 품질점검 계획 및 점검실적 누락	- 자체 품질점검 평가표 추가

4		건설사업관리단 검토의견

○「하남선(5호선연장) 건설공사사」품질관리계획서를 관련규정에 따라 검토한 결과 적정하게 작성됨.

○ 세부 항목별 검토의견

순번	적 용 항 목	적정여부	비 고
1	건설공사 정보	적 정
2	현장 품질방침 및 품질목표	적 정
3	책임 및 권한	적 정
4	문서관리	적 정
5	기록관리	적 정
6	자원관리	적 정
7	설계관리	적 정
8	건설공사 수행준비	적 정
9	계약변경관리	적 정
10	교육훈련관리	적 정
11	의사소통관리	적 정
12	기자재의 구매관리	적 정
13	지급자재의 관리	적 정
14	하도급관리	적 정
15	공사관리	적 정
16	중점 품질관리	적 정
17	식별 및 추적관리	적 정
18	기자재의 공사 목적물의 보존관리	적 정
19	검사장비,측정장비 및 시험장비의관리	적 정
20	검사 및 시험, 모니터링관리	적 정
21	부적합 공사의 관리	적 정
22	데이터의 분석관리	적 정
23	시정조치 및 예방조치관리	적 정
24	자체 품질점검관리	적 정
25	건설공사 운영성과의 검토관리	적 정
26	공사준공 및 인계	적 정

5		조 치 의 견

○『하남선(5호선연장) 건설공사』품질관리계획서에 대한 책임건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 품질관리계획서(개정)에 대해 승인하고자 함.

붙임 1. 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토보고서 1부.

3. 품질관리계획서(변경) 1부. 끝.