문서번호	도시철도토목부-14051
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
임경태		윤방식	11/10 김진팔
협조
	주무관		이경훈

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지장물(통신선로) 이설방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

지장물(통신선로) 이설방안 검토 보고

본선구간에 매설되어 있는 한전선로 이설구간내 한전의 배전자동화용 전용 통신케이블이 한전선로에 매설되어 있어 한전선로 이설과 동시에 이설이 요구되고 있어 이에 대한 검토 보고임

※ 규모 : 광케이블(12C), 연장288M, 금액 5,939천원

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-606호(2016.11.01) : 한전관로내 통신케이블(LGU+) 이설협의

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 실정보고 내용

○ 본선구간내 한전케이블 이설과 관련하여 한전선로내 한전 배전자동화용 통신케이블이 매설설되어 있어 한전선로 이설과 동시에 통신케이블도 이설이 요구되어 이에 대한 적정성 여부를 검토하여 보고함

□ 지장물 현황

○ 한전 배전자동화 케이블 이설 개요

• 위    치 : 본선 4구간내 굴착부(sta.0km710m～sta.0km940m)

• 규    모 : 광케이블 (12C), 연장(L)=388m

• 관리주체 :  LGU+

• 이 설 비 :  5,939 천원

○ 한전지중화내 통신케이블 현황도

□ 이설비용 조치계획

○ 본 이설비는 기 납부한 본선4구간내 통신케이블 이설비 내에서 이설공사를 시행하고 추후 정산처리(LGU+ 요청)

※ 본선4구간내 통신케이블 이설현황(이설완료)

통신사	통신관로(m)			맨홀(개소)	비 고
	종방향	횡방향	계
LG U+	319	44	363	2	광케이블 6개 관로

• 통신케이블 이설방안 및 이설비 납부현황                    (단위 : 원)

구분	이설방안	이설비	비 고
LG U+	IP전주 가이설 후 원상복구	179,883,000

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 본선4구간(sta.0km710m～sta.0km940m)의 한전케이블 이설과 한전 배전자동화 통신케이블의 동시 이설이 불가피한 것으로 판단됨으로 통신케이블을 이설하고, 이설비용은 기납부된 본선4구간 통신관로 이설비내에서 추후 정산코자하는 관리주체 (LGU+)의 의견을 수용하여 원만한 공정추진이 될 수 있도록 조치함이 타당할것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 지장물(통신선로) 이설방안 실정보고건을 승인조치하고,

○ 통신설로 이설비는 추후 우리본부 지장물이설비 심의과정을 거쳐 정산토록 하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.