투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	선급금 반환

우리 본부에서 계약한 아래 업체에 선급금을 지급하였으나, 계약변경으로 인하여 선급금 일부을 반납 처리하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	2015년 수상비행장 설치 사업성 조사 용역
계약상대자	(주)성원엔지니어링 (대표 : 김진조)
계 약 금 액	금52,650,000원(금오천이백육십오만원)
계 약 일 자	2015.12.07.
공 사 기 간	2015.12.07. ~ 2016.07.04.

나. 변경내역 : 계약금액 및 공사기간 변경(감33,180,000원, 2015.12.07.~2016.07.04.)

변 경 내 역	변경전	변경후
계 약 금 액	52,650,000	19,470,000
공 사 기 간	2015.12.07. ~ 2016.07.04.	2015.12.07. ~ 2016.07.30.

다. 계약변경사유

- 예정 후보지내 안전성 제약요인으로 완전한 용역결과 도출 곤란

- 발주처 요구 수준의 연구용역 수행이 곤란하여 계약자가 변경계약 요청

라. 선급지급 및 반납 내역

- 26,325,000원(2016.3.3일 지급)

- 6,855,000원 반납(변경계약에 따른 선급금 환수)

마. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강하천시설 관리, 한강 관공선 등 운영 및 관                            리, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 반납방법 : 반납고지서에 의거 시 금고에 반납 조치.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	11/11 이상국
협조자
시행	총무과-19957	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)