투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	계약심사 결과 통보(강남순환도로4공구 설계변경))

1. 업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(4공구) 롯데건설(주),

강남순환도시고속도로 건설(4공구) (주)서영엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2016-11-10 18:11:11

3. 지 시 내 용 :

가) 계약심사과-18467(`16.11.10)호 및 토목부-22039(`16.10.28)호와 관련입니다.

나)“강남순환도로4공구 설계변경 계약심사”결과를 아래와 같이 알려드리니 설계변경 철차 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1) 심사결과

- 건 명  : 강남순환도로4공구 건설공사(시점부 지하차도 건설공사 설계변경)

- 심사결과

(단위 : 천원)

심사요청액	심사금액	절감액	절감율
39,007,000	37,057,000	1,950,000	5.0%

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 심사결과 요약서 1부.

3. 세부내역서 1부. 끝

주무관							시희식			도시고속도로과장					代장종환					토목부장					11/11 김영수
협조자
시행			토목부-23207									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-8662						/전송			3708-2599					/	shs9496@seoul.go.kr												/	부분공개(5)