문서번호	토목부-23234
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	11/11 김영수

선사로~고덕지구간 도로확장공사외 1개소 전면책임감리용역 설계변경 및 준공기간 연기 검토보고

(전체12회 및 8차2회)

2016.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로~고덕지구간 도로확장공사외 1개소 전면책임감리용역 -

설계변경 및 준공기간 연기 검토보고

(전체12회 및 8차2회)

감리용역 시행중 감리원 배치 조정에 따른 계약금액 조정 및 공사기간 연기로 인한 감리계약기간 연기 사항이 발생하여 검토 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 외 1개소 통합전면책임감리용역

○ 도 급 자 : ㈜한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

○ 용역현황

(단위:천원)

구 분	도 급 비	계약년원일	착공년월일	준공기한	비고
전 체	4,570,900	'09. 3.13.	'09. 3.16.	'16.12.31.
8차2회	500,000	'16. 2. 1.	'16. 2. 5.	'16.12.31.

□ 설계변경 및 준공기한 연기

○ 설계변경 사유

- 전체12회 : 계약금액 조정 및 공사기간 연기로 인한 준공기간 연기

- 8차 2회 : 2016년도 공사추진에 따른 공종별 감리원 투입기간 정산

○ 준공기한 변경

구 분	당 초	변 경	증 · 감
전체	'09. 3.16. ~ '16.12.31.	'09. 3.16 ~ '17.11.30.	증)11개월
8차2회	'16. 2. 5. ~ '16.12.31.	'16. 2. 5. ~ '16.12.31.	변경없음

○ 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
전제 12회	4,570,900	4,922,600	증)351,700	공사기간 연기
8차 2회	500,000	500,000	-	감리원 조정

○ 설계변경 세부내역

- 전체 12회

구 분	단위	전 체 11 회			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
감 리 사(총괄)	개월	93.5	104.5	증)11.0
감 리 사 보(토목)	“	92.3	103.3	증)11.0
감 리 사 보(토목)	“	57.9	68.9	증)11.0
감 리 사 보(안전)	“	32.1	22.2	감)9.9
감 리 사 보(전기)	“	19.5	20.5	증)1.0
감 리 사 보(조경)	“	10.2	10.2	-
감 리 사 보(기계)	“	8.5	7.5	감)1.0
비상주(도로,토질 등)	식	1.0	1.0	-

- 8차2회

구 분	단위	8차1회			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
감 리 사(총괄)	개월	10.74	10.74	-
감 리 사 보(토목)	“	10.74	10.74	-
감 리 사 보(토목)	“	10.74	10.74	-
감 리 사 보(안전)	“	2.8	1.0	감)1.8
감 리 사 보(전기)	“	0.3	2.0	증)1.7
감 리 사 보(조경)	“	0.0	1.0	증)1.0
감 리 사 보(기계)	“	1.0	0.0	감)1.0
비상주(도로,토질 등)	식	1.0	1.0	-

□ 조치 계획

○ 2016년도 공사추진에 따른 공종별 감리원 투입기간 정산에 따른 설계변경 및 공사 준공기간 연기에 따른 감리용역 준공기간 연장을 하여 공사장 관리에 만전을 기하고자 함.

○ 연기에 따른 귀책 소재 : 도급자에 있지 않음.

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 설계변경 의뢰서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.