투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재(강판) 납품기한 연기요청(서부이촌동 보행육교)

1. 기반시설과-4718(2016.11.11.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 추진중인 ｢서부이촌동 보행육교 설치공사｣에 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 기간변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 기간변경 요청내역

품 명	물 품 식별번호	수량	단위	납품기한 연기		비고
				당초	변경
강 판	20292137	1	식	‘16.08.31	‘16.11.18	총구매 141,938kg

나. 연기사유 : 구매량이 소량이고 수요가 적은 자재(SM520B)로 생산처(현대제철)의 사정(생산 설비변경 등) 및 최소 공급기간(45일 이상) 소요.

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	11/11 박병현
협조자
시행	총무과-19949	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)