문서번호	시설보수과-6363
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	11/11 이성재
협조

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

현장실정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

현장실정 검토보고

우리센터에서 시행중인 『중랑천 차집관로 성능개선 공사』의 도급자로 부터 현장실정보고 문서가 접수되어 이에 대한 검토보고임.

1		사업개요

□ 위    치 : 중랑천(방학동 현대아파트~창동 문화체육센터)

□ 사업기간 : ‘16.09.09 ~ ’16.12.31

□ 사 업 비 : 1,590백만원(도급 959백만원, 관급 369백만원, 이전 262백만원)

□ 도 급 자 : ㈜승일토건  대표 박영온

□ 공사내용

- D=800~1,800mm, L=506m(D=800mm → 306m, D=1,800mm → 200m)

- 가시설(조립식 간이 흙막이) 304m, 강판차수공 200m, 아스콘 포장 15.71a

2		실정보고 내용

□ 본 공사 PC관 부설구간 시험터파기 결과 용수공급관로 (D=1,100mm)가 기존      차집관로와 평행으로 부설되어 신설관로와 기존관로간 연결이 불가한 실정임

3		검토결과

□ 현장조사결과 본 공사에 저촉되는 용수공급관로는 기존 차집관로와 평행으로      부설되어 있어 이설이 필요한 실정임.

□ 본 공사에 저촉되는 용수공급관로는 도봉천과 방학천에 공급되는 관로로 이설에      따른 용수공급 중단시 시 물고기 고사 등에 따른 하천환경 훼손 및 민원발생이      예상되어 무단수로 용수공급관로 이설 필요

4		조치의견

□ 원활한 공사시행을 위하여 도급자로 하여금 무단수 용수공급관로 이설을 우선      시공토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리(증 327,140천원)

붙임 : 관련문서 1부.    끝.