문서번호	시설보수과-6361
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	11/11 이성재
협조
	주무관		최승룡

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

현  장  실  정  보  고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11

중랑물재생센터

(시설보수과)

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

현  장  실  정  보  고

우리센터에서 시행중인 『서문~게스트하우스간 도로정비 및 휀스 설치공사』   추진 중 도급자로부터 설계누락 및 추가공종 발생에 따른 실정보고 문서가   접수되어 이에 대한 검토보고임.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스설치 공사

○ 공사기간 : 2016.08.19 ~ 2016.11.30

○ 도 급 자 : 호곡종합건설(주) 대표 : 박성환

○ 도 급 비 : 84,515천원

○ 공사개요 : 투수블럭설치 770㎡, 경계석설치 300m, 경계측구 300m

Ⅱ		실정보고 내용

○ 설계누락 내용

- 도로커팅(절단) 300m(증 466천원)

- L형 측구깨기(폭 0.3m) 45㎥(증 567천원)

- 이중벽PE관부설 및 접합(D250mm) 29m(증 509천원)

- 보조기층 포설(T=30㎝)  9.1㎥(증 219천원)

- 경계석설치 150*150*1000 시공물량 증가(238m 증 8,548천원)

- 경계석설치 200*250*1000 시공물량 증가(44m 증 1,745천원)

○ 물량 및 규격 변경내용

- 투수블럭설치(T=6.0m) 시공물량 증가(96㎡ 증 282천원)

- 소형고압블럭철거 시공물량 증가(234㎡ 증 553천원)

- 빗물받이설치 시공물량 감소(3개소 감 831천원)

- 식재(명자나무) 25㎡ 시공제외(25㎡ 감 4,743천원)

- 식재(쥐똥나무) 70㎡ 시공제외(70㎡ 감 7,062천원)

- 관목이식(무궁화) 120주 시공제외(120주 감 1,597천원)

- 잔디식재 시공물량 증가(150㎡ 증 925천원)

○ 서문~게스트구간 공사구간에 설치된 급수탑 보호막 휀손으로 미관저해 및 겨울철          동파의 우려가 있어 보수ㆍ보강코자 함(증 1,705천원)

Ⅲ		검토의견

○ 현장 확인결과 위의 공종은 필요하다고 판단되므로 도급자로 하여금 우선 시공          토록하고 추후 설계변경에 반영, 정산 처리코자 함.(증 5,100천원)

붙  임 : 1. 관련문서(실정보고 제출 건) 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 현황사진.  끝.