투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 납품기한 연기요청(서부이촌동 보행육교 설치공사)

1. 기반시설과-4675(2016.11.8.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 추진중인 ｢서부이촌동 보행육교 설치공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 기간변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 기간변경 요청내역

납품요구번호	물품식별번호	품명	단위	수량	납품기한 연기		비고
					당초	변경
12-16-1-52848-00	21639795	시멘트	포	1,763	2016. 11. 08.	2016. 12. 31
12-15-1-56128-00	22718941	교량난간	m	106	2016. 12. 31	2017. 04. 20
12-15-1-56132-00	22639382	교량난간	m	106	2016. 12. 31	2017. 04. 20
12-15-1-56237-00	22386776	세라믹벽돌	m2	1,247	2016. 12. 31	2017. 04. 20
12-15-1-56131-00	22114066	옥외용벤치	개	5	2016. 12. 31	2017. 04. 20
12-15-1-56236-00	20982824	콘크리트블록	m2	213	2016. 12. 31	2017. 04. 20

나. 변경사유: 사용할 시기 미도래

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	11/11 박병현
협조자
시행	총무과-19893	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)