문서번호	생활환경과-16620
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
음식폐기물관리팀장	생활환경과장	환경에너지기획관	기후환경본부장
한성현	구본상	성은희	11/14 유재룡

『 난지물재생센터 』

음폐수 처리시설 개․보수 계획

2016. 11. 14

기후환경본부

(생활환경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『 난지물재생센터 』

음폐수 처리시설 개․보수 계획

난지물재생센터 음폐수 반입에 따른 방류수 수질기준 유지와 악취 관련지역주민 불편해소, 서대문구 음식물 자원화시설 200톤/일 증설에 대비하여, 음폐수 투입설비 등 처리시설을 개․보수하고자 함.

□ 추진배경

○ ’12년 11월 런던협약 이행을 위한 해양환경관리법 시행규칙 개정에 따라 ’13년 초부터 중랑․서남․난지 물재생센터 등에 음폐수 반입 처리

※ 그 동안 해양배출 가능했던 육상폐기물의 종류에서 “음폐수” 제외

○ 음폐수 반입에 따른 방류수 수질기준 유지와 악취 관련 지역주민 불편 해소, 서대문구 음식물 자원화시설 200톤/일 증설에 대비하여 음폐수 처리시설 개선 필요

※ 중랑․서남물재생센터는 음폐수 반입을 위해 ’13~14년까지 시비  57억원 투입하여 노후설비 교체 등 개․보수 완료

□ 현황 및 문제점

○ 하수처리 용도로 건설된 저류조, 투입설비 만으로 음폐수 처리 한계

- 음폐수 저장공간 부족 및 투입설비 미비로 소화조 7지에 필요한 적정한 음폐수 투입 곤란

- 음폐수 과다 투입 시 소화 효율 저하 및 하수처리 부담 가중

- 음폐수에서 발생되는 악취로 인한 인근 지역주민 민원 발생

○ 난지물재생센터 내 위치한 서대문 음식물쓰레기 자원화시설 200톤/일 증설 추진하고 있으며, 완료 시 음폐수 150톤/일 추가 발생

○ 현재 음폐수 투입 및 처리시스템

⇒ 서대문구, 우광, 고양시 등 계열별 개별 운전만 가능

□ 개선방안

○ 소화조에 음폐수 투입량 완충 조절 가능한 저장탱크와 소화조 7지에 필요한 만큼 음폐수 투입 가능한 병렬배관 시스템을 갖춘 투입시설 신설

○ 음폐수에서 발생되는 악취 제거를 위한 탈취설비를 설치하여 지역주민 민원 및 불편을 해소하고, 주민과 유기적인 협력체계 구축

○ 효율적인 소화조 운영관리로 친환경 재생에너지인 바이오가스 생산량 증대와 방류수 수질 향상 등을 통해 하수처리 부담 완화

○ 개․보수 완료 후 음폐수 투입 및 처리시스템

⇒ 소화조 7지에 원하는 만큼 각각 음폐수 투입 가능

□ 음폐수 처리시설 개․보수 계획

○ 사 업 비 : 20억원 (사업기간 : ’17. 1 ~12월)

○ 시행방법 : 난지물재생센터로 사업비 재배정, 난지물재생센터에서 설계 및 공사시행

○ 사업내역 및 소요예산

(단위 : 백만원)

사 업 내 역	소요예산
계	2,000
음폐수 투입구 및 저류조 설치	300
펌프 및 배관 등 이송설비 설치	500
제어시스템 및 전기공사	400
악취방지시설 설치	700
기타 부대설비 공사	100

□ 향후 추진 계획

○ ’17. 1월 : 사업비 재배정(생활환경과 ⇒ 난지물재생센터)

○ ’17. 2 ~ 3월 : 설계 및 공사 발주

○ ’17. 4 ~ 12월 : 공사 시행 및 준공