준공기한 연기 보고서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김용섭	함현준	11/14 박길영

	명에 의하여 『2016년 서강동외 7개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2016. 11. 14.
보 고 자 : 직 지방시설주사보 성명 : 김용섭

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기 보고서(***************)
내용	1. 공사위치 : ******************* 2. 작업지시번호 : ****** 3. 급수공사 종별 : 신설 4. 보고 내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시하였으나, 수요가에서 공사 공정상(비계철 거 지연 및 폐기물 적치 등)으로 공사기간 연기을 요청하여 공사기간내 공사가 불가능한 실정임 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전 을 기하고자 합니다. ◆ ************************************* *************************************** 6. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

끝.