문서번호	정보공개정책과-23016
결재일자	2016.11.14.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

		시 민
주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장
정슬희	김종필	11/14 조영삼

2016년도 중요기록물 정리사업 추진현황 보고(10월)

2016. 11

행  정  국

(정보공개정책과)

2016년도 중요기록물 정리사업

추 진 현 황  보 고(10월)

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2016.4.27 ~ 2016.11.30. (총 218일)

○ 사 업 량 : 총 14,000권

○ 사 업 비 : 금740,884천원(부가가치세 포함)

○ 수행업체 : ㈜듀플렉스**********

○ 사 업 장 : 서소문별관 후생동 지하1층, 외부사업장(구로동)

▢ 추진실적

○ 추진기간 : 2016.10.01 ~ 2016.10.31

○ 투입인력 및 공정률 현황

구 분	계 획	10월 실적	누 계
투입인력	6,711MD	2,034MD	4,663MD
공 정 률	100%	13.27%	83.62%

○ 세부추진사항

- 기록물 분류~공개구분 공정 완료

- 원문스캐닝(13,176권), 재편철(448권)

▢ 향후계획

○ 기록관리시스템 업로드 : 11.14 ~

○ 기관검수              : 11.16 ~

○ 완료보고회            : 12.13(예정)

붙임 : 1. 월간보고

2. 첨부자료(수행인력현황, 회의록 등).  끝.