문서번호	지역경제과-38175
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		유통관리팀장		지역경제과장		기획재정국장
유민		김평선		심수택		11/14 김종순
협조
	감사담당관		정종근
	재무과장		代유종식
	계약팀장		김종수

★ ◉

뚝도활어시장 공동유통센터 조성을 위한 공동판매장(냉동·냉장시설) 설치 계획

2016.  11.

성  동  구

(지 역 경 제 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 ☑ ( 뚝도시장 상인회 ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

뚝도활어시장 공동유통센터 조성을 위한

공동판매장(냉동·냉장시설) 설치 계획

	아라뱃길과 한강을 활용한 수산물 특화시장인 뚝도활어시장 조성을 위한 뚝도시장 내 자연산 수산물 및 건어물 등을 보관할 수 있는 냉동·냉장시설을 설치하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거

전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제19조의7(상권활성화 지원)

「100% 자연산 」뚝도 활어시장 조성 기본계획【구청장 방침 제180호, 2016.4.29.】

전통시장 공동시설 설치 사업계획(市소상공인지원과-14440, ’16. 10. 12.)

Ⅱ				사 업 개 요

건    명: 뚝도활어시장 공동판매장(냉동·냉장시설) 설치

위    치: 성동구 성수동2가 335-98 (뚝도시장 내)

규    모: 21.09㎡(6평 규모), 지상1층

내    용: 철거 및 보수공사, 냉동·냉장시설 설치 공사 등

총 사업비: 55,000천 원(시비)

Ⅲ				주 요 경 과

공유재산심의회 개최: ’16. 9. 29.

임대차 계약 체결일: ’16. 10. 13.

※ 월세: 월 500천 원(임차기간: '16. 10. 15.~'18. 10. 14.)

Ⅳ				추 진 계 획

설치내역

구 분		내 용	공사 기간
냉동·냉장 시설설치 공 사	기초공사	가설 및 철거공사, 벽체 및 바닥공사, 기타공사	15일
	냉동·냉장 시설 설치	저장고 설치공사, 단열공사, 기타 설비공사
전기공사		전기인입공사, 내부 배선공사 5Kw→10kw 증설	10일

냉동·냉장 시설

시설 도면	관련사진

계약방법

구 분	계약방법		금 액
냉장·냉동 시설 설치공사	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호(여성기업)	51,000,000원
전기공사	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호	4,000,000원

Ⅴ				소 요 예 산

소요예산: 55,000,000원(시비)

예산과목

○ 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호,

뚝도활어시장 조성지원(보조), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅵ				추 진 일 정

○ 계약심사 요청	--------------------	'16. 11.
○ 계약 의뢰	--------------------	'16. 11.
○ 착공 및 준공	--------------------	'16. 11. ∼12.

끝.