서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘) 변경계약 요청

우리 부서에서 시행중인 「서강대교, 원효대교, 반포대교 보수공사」에 소요되는 관급자재(아스콘) 수량을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재(아스콘) 수량 변경 요청 내역

건명	계약번호	규격	단위	수량			수량변경 사유	비고
				당초	변경	증감
내유동성 아스팔트콘크리트 구매(서강대교, 원효대교, 반포대교 보수공사	2016046297900(계약업체-서부아스콘(주))	WC-6, 13mm, PG76-22, 1등급골재	톤	2,894	3,876	증)982	공사구간 추가에 따른 포장시공 물량 증가	계약금액 당초 : 228,012,470원 변경 : 305,382,280원 증) 77,369,810원

나. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 서강대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(추가 추산금액 42,545,518원)

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 원효대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(추가 추산금액 15,284,874원)

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 반포대교(잠수교) 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(추가 추산금액 19,539,418원)

붙임  합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	최원혁		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	11/14 박문희
협조자
시행	교량안전과-20728	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개