문서번호	교량안전과-20718
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김윤희		유제천	11/14 박문희
협조

광진교 정밀안전진단용역

준공기한 연기 검토 보고

2016. 11.

교량안전과

광진교 정밀안전진단용역

준공기한 연기 검토 보고

우리과에서 시행중에 있는 광진교 정밀안전진단용역 준공기한 연기를 위한 검토보고 입니다.

□ 용역개요 및 시설물 현황

❍ 용 역 명 : 광진교 정밀안전진단 용역

❍ 용역기간 : 2016. 3. 30. ~ 2016. 11. 24.

❍ 도 급 액 : 192,260천원

❍ 계 약 자 : ㈜한국구조물안전연구원 이채규 외 1개사

❍ 교량현황 : 서울시 광진구 광장동 ~ 강동구 천호동

시설물명		규격(m)		구조형식	설계하중	준공연도
		폭원	연장
광진교	본교	20~28.9	1,055.9	STB+SPG	DB-24	2005. 6
	북단램프	7.5	189.6	STB+라멘	DB-24	2005. 6
	남단램프	7.5	244.9	STB+라멘	DB-24	2007.12

□ 추진사항

❍ 2016. 3.30. : 공사계약

❍ 2016. 4.25. : 현장조사 시작

❍ 2016.11. 1. : 최종 보고(자문)회의 개최

❍ 2016.11. 4. : 건설기술심의 요청

□ 준공기한 연기 검토

❍ 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2016. 3. 30. ~ 2016. 11. 24.	2016. 3. 30. ~ 2016. 12. 23.

❍ 연기사유 : 기술심사담당관 내부 사정으로 인한 건설기술심의 일정이 지연(’16.11.30.)되어 절대공기 부족

❍ 지체상금 : 미부과

□ 조치계획

❍ 광진교 정밀안전진단 준공기한 연기 조치

❍ 건설기술심의 자문결과 심의의견 반영하여 용역 준공

붙임 : 기술심의 일정관련 공문 1부.  끝