문서번호	기전과-12390
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
심예선		전결 11/14 양영민
협조

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부도로사업소

(기전과)

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업의 교통신호기 공사 업무수행 중에 감리업체가 제출한 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 현장실정보고서 제출 건

- 문서번호 ㈜트래픽스 TR-개선-1109(2016.11.14.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치: 남영동교차로 외 1개소

○ 공사내용: 신호기 신설·이설 및 위치조정 1식

○ 계약금액: 123,964,600원

○ 공사기간: 2016.4.29. ∼ 2016.12.10.

○ 계약업체: ㈜창희이엔에스 대표 임창우

○ 감리업체: ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액 : 감 10백만원(124백만원 → 114백만원)

○ 세부내역

- 남영동삼거리: 감 10백만원

․현장여건에 따라 Ø300지주 2본 13m부착대 2본을 Ø250지주 2본 11m부착대 2본으로 변경설치

․지장물로 차량지주 기초설치 불가하여 보행지주 설치위치에 보행지주 철거 후 보행지주 및 차량지주 통합설치

․현장조사결과 기존관로 재사용으로 차도 및 보도 굴착취소

․보도 밑에 있는 기존 맨홀을 철거하고 보도 높이에 맞게 디자인맨홀로 교체

※ 붙임 현장실정보고서 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에 따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙 임: 감리업체 현장실정보고서 1부.  끝.