서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장)
(경유)
제목	계약심사서류 보완요청(2016년 노후 차집관로 시설물 보수공사)

1. 시설보수과-6355호(’16.11.14)와 관련입니다.

2. 상기호로 계약심사 요청한『2016년 노후차집관로 시설물보수공사』에 대하여 다음과 같이보완을 요청하니 11월16일(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

다음

가. 발주기관의 필요한 의한 설계변경시 설계변경 요구 서류

나. 계약상대자 실정보고 서류

다. 책임감리 검토보고 서류

라. 발주기관 설계변경 보고서(설계변경 사유서)

마. 설계변경 전․후 도면

바. 설계변경 수량 및 단가산출서(일위대가 및 단가조사서, 견적서 등)

사. 설계변경 내역서, 당초 계약내역서

아. 내역 전산파일[공사원가 호환규정파일(XML파일)]

- 신규비목 및 증가물량만 해당

자. 설계변경 공사시방서

차. 설계변경 시점에 관한 서류

(1) 변경도면을 발주기관이 확정한 서류

(2) 변경도면이 필요 없는 경우, 계약당사자간에 설계변경을 합의한 문서

(3) 우선시공을 한 경우, 우선시공 승인 문서

카. 협의율(발주기관 요청의 경우 증가 물량, 신규단가에 대하여 적용)

타. 물량 및 단가 증감 대비표

파. 특정제품(공법)심사 결과. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	차승환		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	11/14 김성규
협조자
시행	계약심사과-18631	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3330	/전송	02-2133-1032	/	chsh155@seoul.go.kr	/	대시민공개