문서번호	총무과-39288
결재일자	2016.11.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
석명오		임철수	11/15 정상택
협 조

청사 녹지대 식재 유지관리 공사 설계변경(준공정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

청사 녹지대 식재 유지관리 공사 설계변경(준공정산) 보고

청사 녹지대 식재 유지관리 공사의 준공처리를 위한 제경비(건강· 연금·노인장기요양보험) 정산을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약현황

❍ 공 사 명 : 청사 녹지대 식재 유지관리 공사

❍ 기    간 : 2016.3.21. ~ 11.15.

❍ 업 체 명 : 주식회사 한성나무종합병원 대표 주병훈

❍ 금    액 : 금16,753,000원(금일천육백칠십오만삼천원)

❍ 예산과목 : 청사관리, 청사 녹지대 및 수목관리, 시설비

□ 과업내용

❍ 청사 녹지대 교목 및 관목류 시비·방제 등 유지관리 공사

- 본관 외 2개 별관: 소나무 외 25종 174주, 관목 시비 및 방제(4회)

- 남산2별관 : 소나무 외 12종 78주, 관목 350㎡ 시비 및 방제(3회)

□ 설계변경(정산) 및 검토내용

❍ 변경사유

- 준공처리 전 제경비 정산 처리(건강·연금·노인장기요양 보험료)

❍ 변경금액

구 분	금 액 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감 액
총공사비	**********	**********	감 385,000

※ 세부내역 붙임 변경 내역서 참조

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 설계변경(정산)을 시행하고, 변경 계약 체결 후 청사 녹지대

식재 유지관리 공사에 대해 준공처리 하고자 함

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.