투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	인재개발원 노후 팬코일유닛 교체공사 설계변경 시행

1. 인재기획과-16414(2016.11.14)호와 관련입니다.

2.「인재개발원 노후 팬코일유닛 교체공사 실정보고」에 따라 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 인재개발원 노후 팬코일유닛 교체공사

- 계약금액 : *************************

- 계약기간 : ***********************

- 계약업체 : ************

- 주요공사 : 팬코일유닛 32대 철거ㆍ설치, 밸브 64개 철거ㆍ설치

나. 설계변경 : 내역서 붙임

- 변경내역 : 공사기간 변경없이 내역 변경

구분	당초	변경	증ㆍ감	비고
공사기간	*******************	변경없음	-	배관자재 후렉시블 수량 변경 - 64개 ⇒ 0개
계약금액	***********	***********	*********

다. 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비확충,

인재원청사 유지관리, 공공운영비

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 공사계약 변경 합의서 1부.

3. 공사 실정보고 1부.  끝.

주무관	한성훈		시설재무팀장	代남성준		인재기획과장	전결 11/15 원권식
협조자
시행	인재기획과-16454	(		)	접수		(		)
우	06756	서울 서초구 남부순환로 340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3348-2057	/전송	02-3348-2346	/	hl0515@seoul.go.kr	/	부분공개(6)