투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(오목지하차도 관리실 출입구 변경공사)

우리사업소에서 시행중인 『오목지하차도 관리실 출입구 변경공사』에 대한 준공기한을 다음과 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 오목지하차도 관리실 출입구 변경공사

나. 계 약 자 : 명남종합건설(주) 대표 박남재

다. 준공기간 변경

- 당 초 : 2016. 7. 25. ~ 2016. 11. 21.

- 변 경 : 2016. 7. 25. ~ 2016. 12. 12.

라. 연기사유

『전기공사 소요기간 및 출입구벽체 마감재 변경시공, 급기닥트 이전설치 추가공종』발생에 따른 절대공기 부족

마. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

따로붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	윤동원		시설보수과장	11/15 박병연
협조자
시행	시설보수과-9578	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	부분공개(7)