급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		주무관	시설관리과장			결재
박행종		강동철	11/15 천성훈
협 조

영등포구관내 상수도공사 감독업무 수행중 아래와 같이 공사기한 연기 변경사유가 발생하여 보고합니다.

2016.  11.   .

직 지방시설주사보 성명: 박행종

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	********	***	‘16.11.4 ~ ’16.11.18	신설-151	D=30mm, L=4m	하송이엔씨(주)
2	**********	***	‘16.11.4 ~ ’16.11.18	신설-152	D=25mm, L=7m

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 수요가의 현장 자재적치 및 현장 여건으로 인한 공사기한 연기

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	********	‘16.11.4 ~ ’16.11.18	‘16.11.4 ~ ’16.12.15	공사 연기 시행
2	**********	‘16.11.4 ~ ’16.11.18	‘16.11.4 ~ ’16.12.15	공사 연기 시행

붙임 : 급수공사 연기원 각1부.  끝.