문서번호	도로시설과-13658
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전시설팀장	도로시설과장
박지영	김호성	11/15 송상영

남산1호터널 등 DMB 중계설비 설치계획

2016.11

안전총괄본부

(도로시설과)

남산1호터널 등 DMB 중계설비 설치계획

방송통신발전 기본법(‘16.6.23) 시행됨에 따라 터널 및 지하차도에 DMB 중계설비를 설치하여 원활한 방송시청, 각종사고·재해 등 비상시 방송기능을 확보코자 함.

□ 관련근거

□ 방송통신발전기본법 제40조의 3 (‘16.6.23, 방통위)

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 4.7.3 (‘16.8.12, 국교부)

- 연장 500m 이상 터널은 DMB 중계설비 설치

□ 추진배경

□ 자연재해, 재난상황시 터널내 시민들에게 상황정보 등을 제공하여 대피할 수 있도록 지상파 DMB 수신 필요

□ 터널내 화재 등 긴급상황 발생시 운전자에게 상황전파 및 대피 등안내방송을 위해 DMB 중계설비 설치 추진

□ 현 황

□ 도로터널 : 총 46개소(시 34, 구 7, 민자 5)       (단위 : 개소)

계	3,000m이상	1,000m이상~3,000m미만	500m이상~ 1,000m미만	500m미만~ 200m이상	200m미만
46	2	10	6	14	14

※ 붙임1 터널별 재난방송설비 시설내역 참조

□ DMB 중계설비 설치현황(‘16.10월말 현재)

(단위 : 개소)

구분	계	3,000m이상	1,000m이상~3,000m미만	500m이상~1,000m미만	500m미만~200m이상	200m미만
DMB	3	2	1	-	-	-

※ DMB 중계설비 설치대상(연장 500m 이상) 18개소 중 15개소 미설치

□ 재난방송 수신 계통도

□ 사업계획

□ 사업명 : 남산1호터널 등 DMB 중계설비 설치

□ 사업기간 : ‘17.1월~12월

□ 사업규모 : 터널 7개소에 DMB 중계설비 설치(연차적 추진)

- 7개소 : 남산1호·2호·3호터널, 위례터널, 북악터널, 구기터널, 호암2터널

※ 붙임1 터널별  재난방송설비 시설내역 참조

□ 사업비 : 587백만원

□ 사업내용

- DMB 중계설비(, 안테나 등 설치 1식

- 누설동축케이블 설치 등 전기배관배선공사 1식

※ 붙임 2 터널별 DMB 중계설비 세부사업비 내역 참조

□ 추진방법 : 도로사업소에서 도급공사 발주 및 보수

□ 일 정

- ‘17.1~2월 : 터널별 DMB 수신감도 음영지역 등 현장조사

- ‘17.3~4월 : 발주 및 계약

- ‘17.10월 : 공사준공, 시운전 및 점등

□ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로기전시설물 관리, 남산1호터널 등 DMB 중계설비 설치, 시설비 및 부대비

붙임 : 1. 도로터널 재난방송설비 시설내역 1부

2. ‘17년 교량별 경관조명 세부보수내역 1부.  끝.

붙임 1

도로터널 재난방송설비 시설내역(총 46개소)

연번	터널명	연장 (m)	쌍굴/단굴	준공 년도	재난방송설비 설치대수		비고
					라디오	dmb
계					28	3
1	관악	4,990	쌍굴	`16	1	1	민자사업자
2	봉천	3,230	“	`16	1	1	“
3	서초	2,620	“	`16	1	1	“
4	용마	2,565	“	`14.	1		“
5	우면산	1,967	“	`03	1		“
6	홍지문	1,890	쌍굴	‘99	1
7	위 례	1,814	“	`15	1
8	정 릉	1,650	“	‘99	1
9	남산2호	1,620	단굴	‘70(`01)	1
10	남산1호	1,530	쌍굴	‘70,‘94	1
11	남산3호	1,280	“	‘78	1
12	구 룡	1,180	“	‘98	1
13	북 악	810	“	‘71,‘91	1
14	구 기	610	“	‘80	1
15	호암2	605	“	‘00	1
16	상 도	568	“	‘81	1
17	금 화	555	“	‘80	1
18	방화	495	“	‘16	1
19	자하문	485	“	‘86	1
20	동망봉	482	“	‘03	1
21	화 곡	442	“	‘83	1
22	난 곡	360	“	‘92	1		DMB 양시청
23	금 호	320	“	‘84	1		“
24	국사봉	320	“	‘04	1		“
25	월드컵	305	“	‘02			“
26	삼 청	303	단굴	‘70	1
27	일 원	260	쌍굴	‘93
28	무지개	255	단굴	‘05			DMB 양시청
29	매 봉	250	“	‘92			“
30	공 릉	220	쌍굴	‘94	1
31	솔 샘	191	“	‘02			DMB 양시청
32	옥 수	165	“	‘84			“
33	사 직	140	삼련	‘67			“
34	궁 동	140	쌍굴	‘01			“
35	작 동	130	“	‘01			“
36	산 복	121	“	‘90			“
37	호암1	90	“	‘00			“
38	생 태	80	“	11
39	범 박	40	“	11
40	오패산	815	단굴	‘10	1		강북구
41	은평	340	“	‘98	1		은평구, DMB 양시청
42	천왕1	33	쌍굴	‘12			구로구
43	천왕2	34	“	‘14			구로구
44	삼성산	146	단굴	‘08			금천구
45	삼성산2	88	“	‘10			금천구
46	낙성대	110	“	‘99			관악구,DMB 양시청

붙임 2

도로터널 재난방송설비(DMB) 세부 사업비내역

(단위 : 천원)

연번	터널명	연장(m)	쌍굴/단굴	준공년도	재난방송설비(DMB) 소요예산
계					1,391,760
1	홍지문	1,890	쌍굴	‘99	137,190
2	정 릉	1,650	“	‘99
3	위 례	1,814	“	`15	90,000
4	남산2호	1,620	단굴	‘70(`01)	80,000
5	남산1호	1,530	쌍굴	‘70,‘94	118,000
6	남산3호	1,280	“	‘78	80,000
7	구 룡	1,180	“	‘98	91,170
8	북 악	810	“	‘71,‘91	73,000
9	구 기	610	“	‘80	73,000
10	호암2	605	“	‘00	73,000
11	상 도	568	“	‘81	72,200
12	금 화	555	“	‘80	72,200
13	방 화	495	“	‘16	72,000
14	자하문	485	“	‘86	72,000
15	동망봉	482	“	‘03	72,000
16	화곡	442	“	‘83	72,000
17	삼청	303	단굴	‘70	72,000
18	공릉	220	쌍굴	‘94	72,000

※ 파란색 글씨 : 587백만원(‘17년 예산)