투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(레미콘 외 1종)

우리사업소에서 2016년 예산사업으로 시행중인 『오목지하차도 관리실 출입구 변경공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 납품기한 변경요청(레미콘 외 1종)

나. 납품기한 변경요청

품 명	물품식별번호	규 격	단위	수 량	납품기한
					당초	변경
레 미 콘	30111505	25-27-150	㎥	110	2016.11.21	2016.12.12
레 미 콘	30111505	25-24-80	㎥	11
레 미 콘	30111505	25-18-80	㎥	6
철근콘크리트용봉강	30101619	HD22(SD400)	ton	5.948
철근콘크리트용봉강	30101619	HD19(SD400)	ton	5.265
철근콘크리트용봉강	30101619	HD16(SD400)	ton	2.327
철근콘크리트용봉강	30101619	HD13(SD400)	ton	3.527

라. 변경사유 : 공사기간 연기사유 발생에 따른 납품기한 변경

마. 예산과목 : 도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계), 도로시설물 (터널,복개,지하차도,세척)일상유지보수

붙임 : 공사기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	윤동원		시설보수과장	11/15 박병연
협조자
시행	시설보수과-9577	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개