문서번호	기전과-5967
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
전상은		김용문	11/15 유재옥
협조

공사실정보고에 따른 검토결과보고

(2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사)

2016. 11.

남부도로사업소

기전과

공사실정보고에 따른 검토결과보고

(2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사)

우리사업소(기전과)에서 시행중인 2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사(교통신호기)와 관련하여 아래와 같이 공사실정보고에 대한 검토결과를 보고 합니다.

Ⅰ	사 업 개 요

공사명 : 2016년 교통사고 잦은 곳 개선공사(교통신호기)

계약금액 : 금195,234,090원(금일억구천오백이십삼만사천구십원)

공사위치 : 뱅뱅교차로, 삼호가든교차로

공사내용

- 교통신호제어기 이설, 차량(보행)신호등(주) 신설/이설/철거

- 기타 배관/배선

공사기간 : 2016. 06. 03. ~ 11. 30.

계약업체 : 가인전력(주) 대표 김 윤 수

Ⅱ	공사실정보고에 따른 검토결과

뱅뱅교차로

감리 의견	검토결과	증감금액(천원)	비 고
통합지주설치(가로등주+신호등주) 요청 서초구청, 강남구청 요청	수용	증 2,280
교통신호제어기 이설 요청 서초구청 요청	수용	증 2,410
현장여건 반영에 따른 물량 증/감	수용	감 135

삼호가든교차로

감리 의견	검토결과	증감금액(천원)	비 고
용융차량지주(Φ200, 부착대 9m)를 디자인차량지주(Φ250, 부착대 11m)로 변경 요청 서울특별시 교통신호지주 표준근거	수용	증 10,223
현장여건 반영에 따른 물량 증/감	수용	증 263

공사실정보고의견 수용에 따른 공사금액(증액)

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증·감액
도급비	공 급 가 액	177,485,537	187,245,455	증 9,759,918
	부가가치세	17,748,553	18,724,545	증 975,992
	계	195,234,090	205,970,000	증10,735,910

Ⅲ	보고자 의견

공사금액 증액의 주요원인인 차량지주 및 부착대는 서울특별시 교통신호지주 표준도면에 의거 부착대(11m)에 적합한 차량지주(Φ250)로 변경 시행하고,

공사금액 증액분(금10,735,910원)은 공사 집행잔액 및 낙찰차액을 활용코자 함.

- 예산집행현황

구 분	예산재배정 금액(원)	예산품의 금액(원)	집행잔액 (원)	원인금액 (원)	낙찰차액 (원)	비고
계	321,610,000	316,976,820	4,633,180	289,710,910	27,262,910
교통신호기공사	321,610,000	222,167,000	4,633,180	195,234,090	26,932,910
건설폐기물처리용역		6,593,000		6,260,000	330,000
도로복구원인자부담금		88,216,820		88,216,820	-

끝.