투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화․텃밭조성공사)

1. 시설과-6306(2016.11.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성 공사 관급자재 구매

나. 관급자재 현황

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단위	합계	신림119 수량	난곡119 수량	계약자	비고
22656753	목재판재(꾸메아)	1800*90*21	M2	112.88	51.4	61.48	에스와이우드
23064172	구절초	8cm	본	290	180	110	산드래미
23064189	꽃범의꼬리	8cm	본	300	160	140	산드래미
23064174	맥문동	8cm	본	510	360	150	산드래미
23064184	부처꽃	8cm	본	280	160	120	산드래미
23064182	비비추	8cm	본	230	100	130	산드래미
23064181	샤스타데이지	8cm	본	390	210	180	산드래미
23064179	수호초	8cm	본	320	190	130	산드래미
23064177	옥잠화	8cm	본	280	130	150	산드래미
23064176	원추리	8cm	본	150	-	150	산드래미
22206686	금강애기기린초	8cm	본	350	230	120	우리꽃연구소
22206692	꽃잔디레드킹	8cm	본	290	180	110	우리꽃연구소
22663045	꽃잔디화이트	8cm	본	230	120	110	우리꽃연구소
21758009	꿩의다리(노랑)	8cm	본	310	170	140	우리꽃연구소
22206695	노랑숙근코스모스	8cm	본	270	140	130	우리꽃연구소
22206709	무늬억새	10.2cm	본	350	170	180	우리꽃연구소
22206734	스텔라원추리	2~3분얼	본	180	180	-	우리꽃연구소
22206735	아스타(발라드)	8cm	본	180	180	-	우리꽃연구소
22206742	억새(그린라이트)	10.2cm	본	200	200	-	우리꽃연구소
22206736	아스타(춘추)	8cm	본	130	-	130	우리꽃연구소
22206746	억새(호피)	10.2cm	본	170	-	170	우리꽃연구소
20864060	헤데라하이베로니카	L20cm	본	46	46	-	한국헤데라영농조합법인

다. 납품기한 변경

- 당초 : 2016.11.18

- 변경 : 2016.11.24

라. 소요예산 : 13,676,600원(변동없음)

마. 연기사유 : 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 관급자재 연기 검토 보고 1부. 끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	11/15 진병규
협조자
시행	시설과-6324	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개