문서번호	전시과-9835
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		학예연구부장
송가현		11/15 백기영
협 조
	전시과장				代한문희
	프로젝트디렉터				김희진

백남준기념관 상설개관전을 위한

옥외조형물 제작 추진계획(안)

2016. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

백남준기념관 상설개관전을 위한

옥외조형물 제작 추진계획(안)

⦁백남준기념관 상설개관전의 중추적 상징물인 <수월>과 <웨이브타워>를 제작, 설치하여 기념관의 입구로부터 전시장 내부로 연결되는 서사의 맥락을 완성하고 중정을 중심으로 하는 기념관 외부환경 조성에 만전을 기하고자 함.

⦁<수월>은 백남준의 예술세계에 투영된 그의 어린시절 경험을 대표적으로 상징하는 조형물로서, <웨이브타워>는 백남준의 미학적 코드들이 집약된 조형물로서 각각 본 전시의 예술적 완성도를 높이는데 핵심적 가치를 부여할 것으로 기대.

1		추진 근거

백남준기념관 상설개관展 <내일, 세상은 아름다울 것이다> 설계 및 제작계획(전시과-9493, 2016.11.4)

2		추진 배경

백남준기념관의 중정에 자리하게 될 <수월>과 <웨이브타워>는 백남준기념관 상설개관전의 핵심인 동시에 기념관을 상징하는 옥외조형물임.

<수월>은 지하-지상에 걸친 구조물로 세숫대야, 거울, 조명 등을 이용하여 만화경의 효과를 내도록 복합적으로 설계, 제작되며, <웨이브타워>는 기념관 밖에서도 볼 수 있도록 4m 높이로 세워지는 아크릴 조형물로 조명을 투사 시 사방 반사효과를 내도록 제작될 예정임.

따라서 위 항목들은 백남준의 예술세계를 종합적으로 이해하고 있는 시각예술가의 디자인기획 및 감독 하에 해당분야의 숙련된 테크니션이 전문적으로 작업을 수행해야 하며, 1차적 모형제작을 거쳐 실물제작을 진행하여야 함.

3		제작 개요

1. 제 작 물 : 백남준기념관 상설개관展의 옥외조형물 <수월>, <웨이브타워>

2. 전시기간 : 백남준기념관 개관일 ~ 2018.12 (최소 2년)

3. 전시장소 : 백남준기념관 중정

4. 소요예산 : 14,000,000원(금일천사백만원)

5. 예산과목 : (부서)시립미술관전시과 (정책사업)문화예술진흥

(단위사업)전시회개최 (세부사업)백남준기념관조성및운영

(편성목)일반운영비 (통계목)사무관리비

4		설계 및 제작계획

1. 수월

⦿ 의미: 3원소(네모-원-세모)의 공간인 중정에서 원(○)에 해당하며, 예술적 영감의 원천 혹은 기원을 상징

⦿ 위치: 중정의 바닥 중심부

⦿ 주재료: 놋세숫대야, 볼록렌즈, LED조명, 거울, 유리 등

⦿ 설계스케치

[수월_스케치_입면도]                    [수월_스케치_조감도]

2. 웨이브타워

⦿ 의미: 3원소(네모-원-세모)의 공간인 중정에서 세모(△)에 해당하며, 소머리, 위성 등 백남준의 예술적 코드들의 또 다른 변형이자 상징적 해석

⦿ 위치: 수월과 일직선으로 이어지는 중정의 가장자리

⦿ 주재료: 아크릴, 안테나 등

⦿ 설계스케치

[웨이브타워_스케치_입면도1]    [웨이브타워_스케치_입면도2]

5		추진 일정

일정	추진내용
9. 27	▹ 전시설계계획 수립
10. 4	▹ 전시설계계획 수립에 따른 전시제작계획(일정) 수립 ▹ 전시물 제작 시작
11. 22	▹ (수월 및 웨이브타워 설치를 위한) 중정바닥 굴착공사 시작
12. 12	▹ 내부 인테리어 및 전시장 공사 시작
12. 13	▹ 수월 및 웨이브타워 제작완료
12. 14 - 12. 16	▹ 수월 및 웨이브타워 운송 및 설치
12. 23	▹ 공간연출 및 제작물 배치 최종확정
12. 26 – 12. 28	▹ 전시 설치
12. 29	▹ 최종 점검
12. 30	▹ 전시 개최 및 개막식 행사

※ 건축공사일정에 따른 일정변동 가능

6		예산 계획

(단위: 천원)

예산과목	구분	내용 및 산출내역	소요예산
총액			14,000
사무관리비	공통공사	공통기반공사비 (가설, 전기, 기타잡공사)	1,000
	수월	재료비	1,000
		노무비(설치비 포함)	1,500
	웨이브타워	재료비	3,000
		노무비(설치비 포함)	3,500
	기획 및 감독	기획, 감독, 관리비 500,000원*2인 (세노그래퍼, 미디어아티스트)	1,000
	미니어쳐 샘플링 제작비	수월 400,000원 웨이브타워 800,000원	1,600
	부가세	총액의 10%	1,400

※ 조명 등 기타잡공사는 공통공사비에, 제작물 운송비는 설치비에 포함

끝.