문서번호	시설보수과-3841
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
이원근	김재봉	강병수	11/15 정흥순
협 조

홍제천 제3교 상류~백련교 상류

차집관로 보수공사 실정보고

2016. 11

난지물재생센터

[시설보수과]

홍제천 제3교 상류~백련교 상류

차집관로 보수공사 실정보고

홍제천 홍제3교하류~백련교상류 차집관거 보수공사(비굴착) 시행 중

당초 공사구간 외 홍제천 하류 일부구간 차집관로가 세굴이 많이

진행되어 보수가 시급한 상태로 현 보수공사에 포함시켜 정비하여

시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 홍제천 홍제3교~백련교상류 차집관로 보수공사

❍ 사 업 비 : 410,041천원(도급비 410,041천원)

❍ 공사개요 : 차집관로 비굴착 보수(D=1200mm, L=407.5m)

❍ 현 공정  : 90%

❍ 공사기간 : 2016. 6. 20 ~ 12. 10

❍ 도 급 자 : (주)형제이형관 김동용 [하도급자 : 거야건설(주) 김성환]

❍ 위 치 도

□ 보고개요

❍ 홍제천 홍제3교 상류~백련교 상류 차집관로 보수공사 시행중 공사

구간 종점부의 관 내부상태가 불량하여, 차집관로 내부 오수가 하천

으로 유입되는 실정으로 하천오염 우려가 있어 보수가 시급한

상태임.

❍ 관 내부상태 불량구간(#5맨홀~#9맨홀 구간)

- D=1200mm 원형 차집관로

- L=183m

- 소요예산 : 약 150,000천원

❍ 현황사진

이음부 깨짐 및 이탈	이음부 이탈

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 시급한 정비를 요하는 사항으로 시공사로 하여금 우선

정비하고 추후 설계변경시 정산코자 함.

❍ 예산 확보 계획 : 공통 분야 시설비 잔액을 활용

❍ 공통분야 시설비 잔액 : 270,000천원.   끝.