문서번호	토목부-23449
결재일자	2016.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	11/15 김영수
협조

측량비용 반영 검토 보고

(사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장공사)

2016. 11.

도시기반시설본부

토 목 부

측량비용 반영 검토 보고

(사가정길 장안삼거리~전농동사거리 확장공사)

도로변 사유지 편입구간 및 대지 경계에 대한 정확한 측량을 통해 민원을 해결코자 경계명시 측량후 비용을 반영코자 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 사가정길(장안삼거리~전농동사거리) 확장공사

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리)~전농동 32 (전농사거리)

○ 규    모 : 도로확장 폭5차로 → 6~7차로, 전체 1,200m중 520m

-  배봉사거리 구간 : 폭5차로  →  6~7차로, 연장390m

-  전농사거리 구간 : 폭5차로  →  6차로, 연장130m

○ 기    간 : 2016.2.29. ~ 2016. 12.31.

○ 사 업 비 : 8,727백만원 (도급비: 1,854백만원)

○ 시 공 사 : 고양종합건설(주), 감 리 사 :  ㈜삼안외 2

○ 공 정 율 : 75%, 보도포장 중

실정보고

○ 사유지와 도로경계가 불분명하여 명확한 경계측량을 위한 비용 반영 필요

- 설계당시 일부만 경계측량하여 도로와 사유지간 경계 불명확하여 민원 발생

- 경계명시 측량필요 (총 60개소, 전농동 19개소 장안동 41개소)

※ 경계명시 측량이란

- 공사를 착공하기에 앞서 시행하며 사업면적 및 경계를 결정하는 측량으로 도시계획시설에 저촉되는 토지에 대하여 정확성을 확인하고자 할 경우

또는 건축물을 공작할 수 있는 한계선, 즉 건축선을 지정하는데 이용함.

○ 현황사진

동대문구 장안동 105-37	동대문구 장안동 285-4

○ 대상 지번

○ 사업비 반영

구 분		당초	변경	증.감	비고
공사비 계		-	15,926	15,926
직접공사비		-	-	-
간접공사비	경계명시 측량비	-	14,478	14,478
소 계		-	14,478	14,478
부가세		-	1,448	1,448

○ 단가적용 : 실투입비 적용

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 변경내역서 1부.   끝.