급수공사 연기보고(개량-64,80,81 신설-108,109)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
전진영	代이유찬	11/15 이경재
협 조
	주무관		최경연

문서번호 :	시설관리과-34699

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2016. 11. 15

복 명 자 : 지방시설서기보 전진영

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016 석관동등 10개동 상수도공사

❍ 현   황

지시번호	공사 위치	지시기간	연기요청일	비 고
개량 64	안암동5가 150-4외 1개소	2016.09.05. ~11.15.	2016.12.15	현장 폐기물 적치로 인해 연기요청.
개량 80	보문동2가 49	2016.10.04.~11.15	2016.12.15	현장 굴착위치 확인지연으로 인해 연기요청.
개량 81	보문동4가 16	2016.10.05.~11.15	2016.12.15	현장 굴착협의로 연기요청.
신설 108	보문동1가 127-6 도시철도	2016.11.03.~11.16	2016.11.30	현장 굴착위치 확인지연으로 인해 연기요청.
신설 109	안암동2가 161-2	2016.11.02.~11.30	2016.11.30	현장 굴착위치 확인지연으로 인해 연기요청.

❍ 요   지 : 공사기간 연기

보고내용

❍ 위와 같이 급수공사 작업지시 하였으나, 현장 공사지연으로 인해 작업이 불가하여 급수공사 가능시까지 작업연기 함.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 위 작업지시 건에 대한 공사기간을 공사가능시(연기요청일)까지 연기코자 합니다.

❍ 귀책사유 : 중부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.