서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	광진교 정밀안전진단용역 변경계약 요청(준공기한 연기)

1. 교량안전과-20718(2016.11.14.)호와 관련입니다

2. 우리과에서 시행중인“광진교 정밀안전진단용역” 준공기한 연기에 따른 변경계약을 아래와 같이 요청합니다.

가. 사 업 명 : 광진교 정밀안전진단용역

나. 사업기간 : 2016. 3.30 ~ 2016.11.24

다. 시 행 자 : ㈜한국구조물안전연구원 대표자 이채규

라. 예산과목 : 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물안전점검 및 진단,시설비 및 부대비,시설비

마. 변경내역

구분	당 초	변 경	비 고
사업기간	2016.3.30.∼2016.11.24	2016.3.30.∼2016.12.23

바. 연장사유 : 기술심사담당관 내부 사정으로 인한 건설기술심의 지연 (2016.11.30.)으로 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	김윤희		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	11/15 박문희
협조자
시행	교량안전과-20852	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-1955	/전송		/	nskyh65@seoul.go.kr	/	대시민공개