문서번호	기반시설과-4776
결재일자	2016.11.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
송봉섭		박일연	11/15 박상돈
협조

2016년 한강공원 분수 저수조 청소용역 설계변경  정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

한강사업본부

(기반시설과)

2016 한강공원 분수

저수조 청소용역 설계변경 정산 보고

2016 한강공원 분수 저수조 청소용역 시행 중 장마에 따른 수시청소 등 사정에 의해 설계변경 사항이 발생 하였기에 보고드림

□ 용역목적

한강공원 내 분수 저수조 청소를 청소전문업체에 위탁하여 효율적, 체계적인 유지관리 및 철저한 수질관리로 이용시민에게 쾌적하고 깨끗한 공원이용 환경을 제공

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2016 한강공원 분수 저수조 청소용역

❍ 용역기간 : 2016. 04. 22 ~ 2016. 11. 20

❍ 도 급 자 : ***********

❍ 계약금액 : 39,050,000원

❍ 용역대상 : 2개소(뚝섬음악분수, 난지거울분수)

구 분	규 모	바닥면적(㎡)	저수조 수량
뚝섬음악분수	Φ30m x 2m	706.5	1
난지거울분수	Φ17m x 1.8m 114㎡ × 1.8m x 6개	226.9 684.0	7
합 계		1,617.40	8

❍ 청소일정 : 29회(정기 19회, 수시 10회)

- 정기청소 : 봄․가을 월 2회, 여름 월 4회 청소

- 수시청소 : 홍수침수 및 수질부적합 등 청소 필요시

□ 변경사유 및 내용

❍ 금년도 집중호우로 인한 저수조 침수로 수시청소 1회 시행

※ 기반시설과-2598호(‘16.7.7.) 수시청소 시행 지시

- 당초계획 29회(정기 19회, 수시 10회) ⇒ 정기 19회 + 수1회 = 20회 시행

❍ 계약변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	증감액
계약금액	39,050,000	25,848,900	-13,201,100

□ 조치의견

❍ ‘16년 한강공원 분수 저수조청소용역을 위와 같이 추진 완료하였기에 최종 설계변경(정산) 조치코자 하며, 계약 담당부서에 계약 변경토록 의뢰 조치하고자 함.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 보험가입 완납증명서 1부.  끝.