문서번호	시설보수과-8563
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김종범		11/15 박국남
협 조

설계변경 검토보고

(매봉터널 정밀안전진단용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

설계변경 검토보고

(매봉터널정밀안전진단용역)

1		용역 현황

○ 용 역 명 : 매봉터널정밀안전진단용역

○ 용역기간 : 2016. 04. 14 ~ 2016. 11. 29.

○ 도 급 자 : ㈜삼림엔지니어링 김인석

○ 도 급 비 : 126,860,000원

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비

2		설계변경 사유

○ “대치교보도환경사업 기본및실시설계용역” 관련, 대치교 내구성 조사 비용 추가

※ 관련근거 : 대치교내구성조사 요청 관련 검토보고(시설보수과-3077호, 2016.5.3.)

○ 자문비 감

※ 관련근거 : 타 용역(일원터널외 6개소정밀점검용역)과 합동자문위원회 개최에 따른 자문비 절감

3		설계변경 내역

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		126,860,000	126,960,000	증) 100,000
도급비	공급가액	114,418,182	115,418,182	증)1,000,000
	부가세	11,441,818	11,541,818	증) 100,000
	자문비	1,000,000	0	감)1,000,000
	계	126,860,000	126,960,000	증) 100,000

4		조치의견

○ 증액되는 예산에 대하여는 낙찰차액을 사용코자 하며,

○ 변경사항에 대하여 설계변경 시행하고 재무과에 변경계약 의뢰코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.