투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청

1. 총무과-12975(2016.11.02.)호와 관련입니다.

2. 식물표본전시실 공기순환기 구매와 관련하여 관급자재 납품기한을 아래와 같이 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 식물표본전시실 공기순환기 구매설치

나. 계 약 자: 은성화학주식회사 대표 이경순

다. 납품기한 연기 내역

물품식별 번호	품 명	규 격	수량	금액(원)	납품기한변경		비고
					변경 전	변경 후
22733651	공기 순환기	500㎥/h	1대	930,000	‘16.11.20.	‘16.12.19.
		800㎥/h	1대	1,290,000
22733649
20770455	냉난방 공조공사	덕트설치기본, 200mm	1식	1,092,500
20770456		덕트설치기본, 250mm	1식	1,425,000
20770457		스파이럴덕트설치, 200mm	67m	1,151,730
20770458		플렉시블덕트설치, 200mm	38m	234,460
20770459		덕트보온, 200mm	8㎡	64,560
20770460		덕트부자재(디퓨저), 200mm	14개	199,500
20770461		덕트부자재(엘보), 200mm	14개	93,800
20770462		덕트부자재(분기관), 200mm	4개	22,800
20770463		덕트부자재(리듀싱분기관), 200*150*200mm	6개	64,380
20770464		룸컨트롤러세트및설치	2개	57,000
20770467		룸컨트롤러용전선 및 전선관설치	37m	150,960
합 계				6,776,690

라. 연기사유 : 선행 공정 준공기한에 맞쳐 납품기한 연기.  끝.

	시설과장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	11/16 공헌구
협조자
시행	시설과-7635	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)