투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	9호선3단계 시스템 책임감리원
(경유)
제 목	9호선3단계 2구간 송변전공사 수전관로(도로굴착 및 복구작업) 공사 승인

1. 서지 9-3 시감 제16-352('16.11.10))호 및 제16-354('16.11.11))호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 9호선3단계 2구간 수전선로공사 도로굴착에 따른 2차 복구 야간작업 및 3차 도로굴착 작업 세부계획서를 아래와 같이 승인 하오니 각종 행정절차(송파경찰서 등) 이행하고, 품질· 안전시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

가. 작업시 준수사항

- 책임감리원 입회하에 시공계획서 및 전력기술관리법 등에의거 감리원                 입회하에 관련법 준수 (건설안전 기본지침 등)

나. 작업 개요

작업내용	작업일시	작업 구간	시공사	현장 근무자		비고
도로 복구	'16. 11. 17(목) 22:00 ~ 11. 18(금) 05:00	생태태공원사거리리~천호대로 한전맨홀	주) 삼진일렉스	감리	박성민	야간
				업무담당	김흥정
도로 굴착	'16. 11. 17(목) ~ 11. 30(수)	938정거장 상부 도로	주) 삼진일렉스	감리	박성민	주간

다. 야간 근무자 : 당일(11월18일) 심야근무 실시 후 대채 휴무.

따로붙임 ; 도로굴착 2차복구 및 3차 도로굴착 위치도(야간작업계획서 포함) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 11/16 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-12628	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	부분공개(6)