문서번호	급수운영과-28098
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김원재		김찬모	11/16 박길영
협 조

노후 배수관 정비공사 시행 보고

[서대문구 홍은동 11-384 ~ 16-7]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

서부수도사업소

(급수운영과)

노후 배수관 정비공사 시행 보고

서대문구 홍은동 9-347번지 일대 노후배수관 정비공사 시행 중 노후배수관(D=100mm×2열)이 추가 확인되어 정비공사를 시행코자 함.

1. 노후 배수관 현황

○ 위    치 : 홍은동 11-384번지 ~ 홍은동 16-7번지 일대

○ 속성자료 : D=100mm, L=90m, 회주철관(CIP) ×2열

○ 공급체계 : 북악터널배수지(가압장)

2. 보고내용

○ 서대문구 홍은동 9-347 ~ 9-859번지 일대 노후 배수관 정비공사 시행 중 배수관(D=100mm×2열)이 노후관(CIP)으로 확인되어 정비가 필요한 상황임.

○ 위치도(GIS도면)

3. 조치의견

○ 노후배수관(D=100mm×2열)을 철거하고 배수관(D=150mm)을 부설코자 함.

- 공사위치 : 서대문구 홍은동 11-384 ~ 홍은동 16-7번지

- 공사개요 : D=150mm, L=90m

- 공사기간 : 2016. 11. 17 ~ 11. 28.

- 소요예산 : 1천9백만원(자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후배급수관정비)

○ 상기 공사를 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』연간단가계약     업체로 하여금 시공토록하고 추후 정산 처리코자 합니다.

첨부 : 위치도 1부.  끝.