문서번호	시설보수과-4904
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
신동헌		11/16 이용재
협조

공사현장 실정사항 검토 보고

- 대방천복개 포장 및 보수공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

공사현장 실정사항 검토 보고

- 대방천복개 포장 및 보수공사 -

우리사업소에서 시행중인 『대방천복개 포장 및 보수공사』의 공사현장 실정보고

(열화부보수 및 추가폐기물 발생 건) 승인 요청이 있어 이에 대한 검토사항 임

[관련근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독1처-9090호(2016.11.07.)]

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 대방천복개 포장 및 보수공사

공사기간 : 2016.07.04. ~ 2016.12.31.

공사개요 : 교면포장 28a, 방수 2,800㎡, 신축이음보수 90m 등

공 사 비 : \ 446,693,000원

(도급비 351,273,000원, 관급비 64,780,000원, 이전비 30,640,000원)

시 공 사 : 유등건설(주) 대표 이혜경

감 독 청 : 서울특별시시설관리공단 공사감독1처 (감독자 이문기)

Ⅱ		실정보고 내용

복개구조물 열화부 보수

- 포장 절삭후 육안 확인결과 기존 복개구조물 열화부 확인

(T=10㎜, A=8.5㎡, 6개소)

폐기물 추가 발생

- 폐콘크리트 발생 : 배수시설 개선을 위한 경계석 및 빗물받이 보수 작업시

추가 발생

- 혼합폐기물 발생 : 교면방수를 위한 유해물제거(바탕처리) 시 기존 아스팔트

프라이머 등 혼합폐기물 추가 발생

Ⅲ		검 토 의 견

복개구조물 슬래브 열화부에 대한 초속경콘크리트 보수 반영

(T=10㎜, A=8.5㎡, 6개소)

폐기물 추가 발생에 대하여는 건설폐기물 처리용역에 반영 처리

- 경계석 및 빗물받이 개선공사 시 물량 발생 (폐콘크리트 : 32톤)

- 교면방수를 위한 유해물제거(바탕처리) 시 기존 아스팔트프라이머 등 혼합

폐기물 발생 (혼합폐기물 : 37톤)

개략공사비 증·감

구분	당 초	변 경	증·감	비 고
공급가액	319,339	307,390	감 11,949
부 가 세	31,934	30,739	감 1,195
도 급 비	351,273	338,129	감 13,144

상기와 같이 현장실정보고 사항을 서울시 시설관리공단에 통보하여 설계변경에

반영하여 정산코자 함.

붙임 : 시설관리공단 실정보고 공문 1부 .끝.