문서번호	역사도심관리과-2731
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	역사도심관리과장	도시관리정책관		도시계획국장
이강수	이정화	류훈		03/17 이제원
협 조
	도심정책팀장		차창훈

준공기한 연기 보고

(역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획 수립)

2014.  3.

도 시 계 획 국

(역사도심관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

준공기한 연기 보고

(역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획 수립)

2012.9.28 계약체결한 “역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획 수립” 용역에 대한 시민참여 토론, 도시계획위원회 자문 등 행정절차 이행에 따른 공기부족으로 준공기한을 다음과 같이 연기코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 역사문화를 고려한 도심부관리 기본계획 수립

○ 계 약 자 : 서울연구원외 3 (시립대, 동일기술공사, 코레스)

○ 계약금액 : 총차 1,117백만원(1차 322백만원, 2차 795백만원)

○ 계약기간 : 총차 '12.9.28 ~ '14.3.21 (총 18개월)

- 1차분 : '12.9.28~'13.2.24(기완료)

- 2차분 : '13.2.25~'14.3.21(진행중)

□ 그간 추진사항

○ '12. 9. 28      계약체결

○ '13. 2~ 3      시민참여단 토론회

○ '13. 4. 12      대토론회 개최

○ '13. 7~8        지역별 워크숍 개최 (7개 지역)

○ '13. 9. 25      국제심포지엄 개최

○ '14. 1.23       도시계획정책자문단 분과회의 자문

○ '14. 2.14       건축정책위원회 자문

○ '14. 2.17~26  시민 토론회 개최 (3회)

□ 준공기한 연기

○ 준공기한

- 총완수일 : 2014.03.21 → 2014.05.21 (2개월 연장)

- 1차 계약 : 2013.02.24 (변경없음 ; 기완료)

- 2차 계약 : 2014.03.21 → 2014.05.21 (2개월 연장)

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 연기사유

- 시민토론, 도시계획위원회 자문 등 행정절차 이행에 따른 공기부족

□ 행정사항

○ 재무과에 용역 준공기한 연기 의뢰.  끝.