문서번호	교량안전과-20910
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
이정훈		유제천	11/16 박문희
협조
	주무관		백운경

서강대교 보수공사 외 1건 예비준공검사 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서강대교 보수공사 외 1건

예비준공검사 실시 계획

서강대교 보수공사 및 한강대교 보수공사의 준공 시기가 도래함에 따라 예비준공검사를 실시하여 준공 전 미흡한 사항을 사전에 보완코자 함

Ⅰ		근 거

❍ 부시장방침 제171호(2013.5.20.)

· 예비준공검사 이행실태 점검결과 개선대책 보고

❍ 국토교통부 고시 제2015-473호(2015.6.30.)

· 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조

(준공검사 등의 절차)

Ⅱ		공사개요

□ 서강대교 보수공사

❍ 공 사 명 : 서강대교 보수공사

❍ 공사기간 : 2016.6.24. ~ 2016.12.20

❍ 총공사비 : 1,520,709천원

(도급비 1,278,079천원, 관급비 194,120천원, 이전비 48,510천원)

❍ 공사내용

- 교면포장 135.92a

- 교면방수 10,384㎡

- 강재도장 263㎡

- 점검 트레이트 발판 12개소

❍ 계약상대자 : ㈜이젠리버텍 대표 조보연

❍ 감독기관 : 1종교량 보수․보강공사 건설사업관리단

□ 한강대교 보수공사

❍ 공 사 명 : 한강대교 보수공사

❍ 공사기간 : 2016.6.10. ~ 2016.12.21

❍ 총공사비 : 840,200천원 (도급비 840,200천원)

❍ 공사내용

- 강재도장 1,692.5㎡

- 콘크리트 표면보수(그라인딩) 1,085.8㎡

- 콘크리트 균열보수 43.1m

- 점검통로 발판 교체 300.8m

❍ 계약상대자 : 아이엠유건설㈜ 대표 김충호

❍ 감독기관 : 1종교량 보수․보강공사 건설사업관리단

Ⅲ		예비준공 검사 계획

❍ 검사일시 : 2016.11.17.(목) 10:00~17:00

❍ 검사자 및 입회자

- 검사자 : 교량관리팀장 유제천, 시설6급 백운경, 시설8급 이정훈

- 입회자 : 1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단 및 현장대리인

․ 책임감리원 : 석영관

․ 보조감리원 : 정창근(서강대교 및 한강대교 담당),

서대철(도장분야)

․ 기술지원감리 : 김동수, 백중현

․ 현장대리인 : 강병구(서강대교), 지유건(한강대교)

❍ 검사방법

- 정산설계도서(설계변경 내역서, 도면, 검측내역 등) 적정 여부

- 시공상태 적정 여부

- 지급자재 사용 적정 여부

- 폐품 및 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부 등

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 검사결과 보완조치 : 2016.11.25일 한

❍ 잔여공정 시행(비계해체 등) 및 준공

- 서강대교 보수공사 2016. 11. 30 준공예정

- 한강대교 보수공사 2016. 12. 15 준공예정

붙 임 : 예비준공검사조서 1부. 끝.