문서번호	시설관리과-10639
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
임종수	代성기옥	11/16 강신재

전식방지공사 예산 재배정 검토보고

2016. 11.

상수도사업본부

(시설관리과)

전식방지공사 예산 재배정 검토보고

북부수도사업소로부터 전식방지공사 예산 부족에 따른 추가 배정요청이 있어 이를 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 필요예산 현황(전식방지공사 시설비)

○ 관련공문 : 북부수도사업소 시설관리과-23204(’16.11.14.)호,

『2016년 세출예산 재배정 요청(상수도관 전식방지공사)』

- 시설비 : 도로굴착복구비 및 폐기물처리비 예산부족

구분	사업내용	예산과목	배정예산	소요예산 (추산총액)	소요예산 (세부내역)	과부족예산	비 고
북부	5개소 전식공사	시설비	623,000천원	659,500천원	공사 617,608천원 전기수용비 2,718천원 굴착복구비 36,447천원 폐기물처리비 2,727천원	예산부족 36,500천원	전식공사 1개소 추가
강남	3개소 전식공사	시설비	461,000천원	337,033천원	공사 307,121천원 전기수용비 242천원 도로굴착복구비29,670천원	미집행예산 123,967천원	케이블 물량 감소

Ⅱ		부족예산 대책

□ 미집행예산이 있는 사업소에서 예산부족 사업소로 예산 재배정

○ 강남수도사업소의 전식방지공사 미집행 예산 중 시설비 36,500천원을북부수도사업소로 재배정

구 분	예산과목	당초배정	재배정 후 예산	증·감
북부수도사업소	시설비	623,000천원	659,500천원	증)36,500천원
강남수도사업소	시설비	461,000천원	424,500천원	감)36,500천원

□ 향후 사업소간 과부족 예산 추가 발생 시 재조정

붙 임 : 관련 공문 1부. 끝.