투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(준공) 시행(매봉터널정밀안전진단용역)

○ 우리 사업소에서 시행중인 『매봉터널정밀안전진단용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(준공)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 매봉터널정밀안전진단용역

나. 용역기간 : 2016. 4. 14 ~ 2016. 11. 29.

다. 도 급 자 : ㈜삼림엔지니어링 대표 김인석

라. 예산과목

⦁ 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		126,860,000	126,960,000	증) 100,000
도급비	공급가액	114,418,182	115,418,182	증)1,000,000
	부가세	11,441,818	11,541,818	증) 100,000
	자문비	1,000,000	0	감)1,000,000
	계	126,860,000	126,960,000	증) 100,000

바. 설계변경 사유

⦁“대치교보도환경사업 기본및실시설계용역” 관련, 대치교 내구성 조사 비용 추가

※ 관련근거 : 대치교내구성조사 요청 관련 검토보고(시설보수과-3077호, 2016.5.3.)

⦁자문비 감

※ 관련근거 : 타 용역(일원터널외 6개소정밀점검용역)과 합동자문위원회 개최에 따른 자문비 절감

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고 1부  끝.

★주무관	김종범		시설보수과장	박국남		동부도로사업소장	11/16 송만규
협조자	주무관	이중연
시행	시설보수과-8620	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0377	/전송	2040-0308	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개