주무관		하천관리팀장		치수과장		안전건설교통국장
이호연		박동규		박상준		전결 11/17 김재겸
협조

문서번호	치수과-17917
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

★ ◉

하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사

〈공사 현장 실정보고〉

2016. 11.

성   동   구

(치 수 과)

하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사

〈공사 현장 실정보고〉

“하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사” 시행 중 추가 시공물량 발생에 따른 처리대책 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사

❍ 도 급 자 : 민안종합건설(주) 대표 이미란

❍ 도 급 비 : 117,920,000원

❍ 사업기간 : 2016. 4. 20. ~ 11. 30.

❍ 규    모

- 체육공원 정비(배드민턴장, 농구장 바닥포장 2개소, 운동기구 정비 26개)

- 안전펜스 정비 L=470m, 목재데크 정비 5개소

- 공중화장실 설치 및 이전 2개소

Ⅱ		보 고 내 용

▢ 체육공원내 공중화장실 관련 부대시설 설치

❍ 중랑천 응봉체육공원 및 살곶이체육공원에 설치 중인 부양식 공중화장실 관련 화장실에서 공급되는 전력선, 수도관, 오수관 설치가 필요함

❍ 중랑천 살곶이체육공원에 설치 중인 부양식 공중화장실의 오·폐수 처리는 당초 살곶이운동장에 매설되어 있는 차집관로에 연결코자 하였으나,

- 과거 살곶이운동장 조성시 성토 등으로 인해 맨홀 및 관로 위치를 정확히 알 수 없는 실정으로 오수관 연결에 어려움이 있어 별도의 오·폐수 저장탱크를 부력체 내부에 설치하고자 함

❍ 응봉체육공원에서 청계천 마장체육공원으로 이전되는 이동식 화장실 설치 및 운영에 필요한 바닥 정비 및 전력선 설치가 필요함

〈 설 치 규 모 〉

위 치	공 종	규 격	수 량	비 고
중랑천 응봉체육공원	오수관 설치	PVC150mm	L=11m
	수도관 매설	D50mm	L=24m
	전력선 설치		L=90m
중랑천 살곶이체육공원	수도관 매설	D50mm	L=24m
	전력선 설치		L=97m
	오·폐수 탱크 설치		N=1개소
청계천 마장체육공원	전력선 설치		L=61m
	콘크리트 포장	T=15cm	A=35㎡

▢ 용답초등학교 운동장(유수지) 농구장 우레탄 포장 교체

❍ 『구청장님과 함께 하는 학부모 간담회』 시 용답초등학교 농구장 우레탄 포장 내 중금속이 검출되어 있어 포장교체를 요청하여,

- 학교측에서 실시한 시험 결과를 확인한 결과 기준치를 초과한 다량의 중금속(납) 성분이 검출되어 긴급 정비가 필요함

- 규 모: A=480㎡(폭 16m, 길이 30m)

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 사업시행 방안

❍ 상기 보고내용과 같이 추가 시공이 필요한 사항에 대하여는 기 계약되어 추진 중인 『하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사』 에 반영하여 우선 시행하고 추후 설계변경코자함

▢ 소요예산

(단위: 천 원)

구 분	규 모	소 요 예 산	비 고
합 계		70,000
전력선 설치	L=248m	13,000
수도관 부설	D25mm, L=48m	4,600
오수관 부설	D150mm, L=11m	400
오·폐수 탱크 설치		17,000
콘크리트 포장	T=0.15m	1,700
농구장 우레탄 포장 교체	A=480㎡	45,000	관급비포함

▢ 준공기한 연기 조치

❍ 추가 시공물량 발생에 따른 절대공기 부족으로 『하천내 체육공원 및 자전거도로 정비공사』 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2016. 4. 20. ~ 11. 30.	2016. 4. 20. ~ 12. 15.

붙 임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 우레탄 포장 중금속 시험성적서 1부.