문서번호	시설관리과-34957
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이연한		한상근	11/17 이경재
협 조

심의위원회개최 결과 보고

('16년 월곡대배수지등 18개소 항청소용역)

2016. 11.

중부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의자료

가. 용역명 : 2016년 월곡대배수지 등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2016.11.16.(수) 11:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 한상근, 6급 김상웅, 6급 이유찬, 6급 박장진, 6급 유명수

마. 용역개요 :

공 종	규 격	단위	수 량		비 고 (증․감)
			당 초	변 경
배수지 항청소	바닥,천정,벽면	㎡	139,900	140,616	증)716
세정제 청소	벽체+도류벽+기둥	㎡	21,692	21,692	-
출입전실 청소작업	노출형, 실내형	개소	34	34	-

바. 용역기간 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 12. 31

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
용역비 (VAT포함)	141,253,000원	131,615,000원	감) 9,638,000원

※건강, 국민 및 노인장기요양 보험료 미납에 따른 실정산 및 세정제 품질시험비

추가에 따른 변경

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 용역 현황

가. 용역명 : 2016년 월곡대배수지 등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 용역개요 :

공 종	규 격	단위	수 량		비 고 (증․감)
			당 초	변 경
배수지 항청소	바닥,천정,벽면	㎡	139,900	140,616	증)716
세정제 청소	벽체+도류벽+기둥	㎡	21,692	21,692	-
출입전실 청소작업	노출형, 실내형	개소	34	34	-

다. 용역기간 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 12. 31

라. 수 급 인 : 빛샘건설(주) 대표 장석균

2. 설계변경 사유보고

가. 용역중 제경비 등 변경 사항 발생

- 물량증가, 감소 : 항청소 면적 증가(시설관리과-23852(‘16.08.04))

‘16년 월곡배수지등 5개소 정밀점검용역 시행에 따른 월곡소배수지 바닥청소 추가(716㎡)

- 세정제 품질 시험의뢰 비용 추가

- 기타 제경비(보험료) 실정산

3. 설계변경 검토결과

가. 제경비(보험료) 실정산 및 품질시험 의뢰 비용 적용

나. 도급액 범위내에서 물량변동

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.