문서번호	자원순환과-18046
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장
채규성	代김학춘	11/17 최홍식

강남자원회수시설 -

환경상영향조사 용역 추진계획

2016. 11.

기후환경본부

(자원순환과)

- 강남자원회수시설 -

환경상영향조사 용역 추진계획

폐촉법 제26조에 의거하여 강남자원회수시설 운영에 따른 주변지역 환경에 미치는 영향을 조사·분석하기 위해 환경상영향조사 용역을 추진하고자 함

□ 현    황

○ 관련법규

- 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제26조

▸ 폐기물 처리시설 운영기관은 시설 운영으로 인해 주변영향지역에 미치는 환경상 영향을 정기적으로 조사하여 공개하여야 함

- 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령 제33조

▸ 환경상영향조사 시행 기관은 주민지원협의체와 협의를 거쳐 선정

- 환경부 고시 제2012-147(2012.7.31.)

▸ 폐기물처리시설 환경상영향조사 실시 주기를 3년으로 정함

○ 시설개요

- 위    치 : 강남구 남부순환로 3318(일원동)

- 시설규모 : 부지면적 14,627㎡(시설용량 900톤/일)

- 처리권역 : 강남, 강동, 관악, 광진, 동작, 서초, 성동, 송파

※ 강남자원회수시설 환경상영향조사 실시현황

조사업체	조사기간	조사항목
㈜삼우환경컨설턴트	’04. 4. ~ ’05. 3.	대기, 수질, 소음, 악취, 식물상, 토양 등
인하대학교 환경연구소	’07.10. ~ ’08. 8.
㈜한국종합공해 시험연구소	’10.12. ~ ’11.11.
㈜산업공해연구소	’13.12. ~ ’14.11.

□ 조사내용

○ 조사방법

- 강남자원회수시설 및 인근의 환경상영향 자료를 조사항목별로 분석

- 수치전산모델을 이용하여 주변영향지역 환경상영향평가 실시

※ 조사항목 : 대기질, 소음, 수질, 악취, 식물상

구 분	조사항목	조사지점	조사주기
대 기 질	아황산가스(SO[eqn: {} _{2}]), 이산화질소(NO[eqn: {} _{2}]), 일산화탄소(CO), 오존(O[eqn: {} _{3}]), 납(Pb), 미세먼지(PM-10, PM-2.5), 벤젠	15개 지점	분기 당 1회
소 음	소 음	22개 지점
수 질	수소이온농도(pH), 생물화학적 산소요구량(BOD), 화학적 산소요구량(COD), 부유물질(SS)	1개 지점
악 취	악취도(공기희석관능법)	8개 지점
식 물 상	식 물 상	-

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 강남자원회수시설 환경상영향조사 실시 용역

○ 용역기간 : 계약일로부터 ~ ’17.11월

○ 추진방법 : 낙찰자 선정 후 위탁운영사에서 용역 추진

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰

- 선정방법 : 주민지원협의체 및 위탁운영사에서 용역 제안서 심사 후 업체 선정

- 입찰참가자격 : 폐촉법 제8조에 따른 전문 연구기관

▸ 국공립 연구기관 및 지방자치단체가 출연한 연구기관

▸「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관

▸「고등교육법」에 따른 대학 또는 전문대학의 환경 관련 연구소

▸「환경영향평가법」 제53조에 따라 환경영향평가업자로 등록된 자

▸「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 신고한 엔지니어링 사업자

▸「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 환경연구원

□ 소요예산

○ 용 역 비 : 금141,150,000원(금일억사천일백일십오만원)

○ 예산과목 : 효율적인 폐기물 처리, 안정적인 폐기물 처리, 자원회수시설 위탁운영(양천, 노원, 강남, 마포), 민간위탁금(307-05)

□ 향후일정

○ 기술용역 타당성 심사 의뢰 및 낙찰자 선정        : ’16.12월

○ 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 착수       : ’17. 1월

○ 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 중간보고회 : ’17. 5월

○ 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 최종보고회 : ’17.10월

○ 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 완료       : ’17.11월

붙  임 : 1) 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 원가계산서 1부.

2) 강남자원회수시설 환경상영향조사 용역 과업지시서 1부.  끝.