“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 사항 통보(반포대교 보수공사)

1. 1종교량 제16-588호(2016.11.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 ‘반포대교(잠수교) 보수공사’와 관련하여 아래와 같이 하도급 변경계약 사항을 통보합니다.

가. 공 사 명 : 반포대교(잠수교) 보수공사

나. 공사기간 : 2016.6.7.~2016.12.3.

다. 도 급 자 : 한림토건 대표 이현숙

라. 도 급 비 : 529,000,000원

마. 하도급 변경계약 내역

하도급 공 종	도급액(원)		하도급 계약현황					비고 (하도급율)
	당초	변경	회사명	전 문 건설업종	계약일	하도금액(원)
						당초	변경
교면방수공	45,700,000	132,591,000	㈜남영이엔지	시설물 유지관리업	’16.8.11	38,940,000	111,896,000	84%

바. 변경사유 : 설계변경으로 인한 원도급액 변경에 따른 하도금액 변경

붙임 : 하도급 변경계약 관련서류 1부(별도송부).  끝.

	교량안전과장
주무관	최원혁		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	11/17 박문희
협조자
시행	교량안전과-20986	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개