함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행-1차 최종('16년 월곡대배수지등 18개소 항청소용역)

1. 우리사업소에서 시행중인『2016년 월곡대배수지등 18개소 항청소 용역(단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차 최종)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2016년 월곡대배수지등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 도 급 자 : **************

다. 용역기간 : 2016년 4월 18일~2016년 12월 31일

라. 설계변경내용 : 제경비(보험료) 감액 및 품질시험 의뢰비용 추가

마. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(배수지항청소)

라. 설계변경 내역                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감
도급비(VAT포함)	141,253,000	131,615,000	감) 9,638,000

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.  끝.

당초추산 : 2016.3.15. No.1(6642) / 2016.11.17. 감추산. 구명임

주무관	이연한		주무관	구명임		시설관리과장	이경재		중부수도사업소장	11/17 유경애
협조자	주무관	한상근
시행	시설관리과-35023	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)