	서울시립미술관
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결보고(백남준기념관 조성 시설공사 건축사 감리용역)

총무과-13771(2016.11.16)호와 관련하여 아래 용역건에 대하여 다음과 같이 변경계약 체결되었음을 보고드립니다.

□ 변경계약 체결내역

계 약 업 체			계약금액	완수기한		비 고
상 호	대표자	주 소		당 초	변경후
㈜건축사사무소 원오원아키텍스	황선영	서울시 서대문구 성산로 559	변경없음	2016.12.04	2016.12.31	공사기간 연장으로 용역기간 조정

따로붙임 : 변경계약서 1부. 끝.

주무관	최현희		총무과장	11/17 황차호
협조자	주무관	김현철
시행	총무과-13842	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8814	/전송	02-2124-8830	/	0922chh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)