투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	대방건설(주) 대당디엠시티현장소장 신동호
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자 부담공사 연장 승인 통보(양천향교역)

1. 마곡B7-3,4BL제16-84호(2016.11.16.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『양천향교역 주변 노면표시 도색 및 제거공사』의 시공기간 변경 승인 요청에 대하여 승인하니 관련 시방기준을 준수하여 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 양천향교역 주변 노면표시 도색 및 제거공사

나. 위    치 : 강서구 양천향교역 교차로 주변

다. 연기사유 : 토목공사 일정에 따른 공사기간 연장

라. 검토결과 : 공사기간 변경 승인

설계사	감리사	시공사	공사기간 변경
			당초	변경
㈜동림TNS	대영유비텍㈜	원광산업	‘15.11.17 ~ ‘16.10.31	‘15.11.17 ~ ‘16.12.21.

마. 공사승인조건

1) 준공 전 tgis.seoul.go.kr에 시공사항 자료 입력 완료 후 준공

2) 공사 완료후 감리 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

3) 휘도 및 두께 측정과 관련하여 측정일시, 측정지점 위치도(측정지점을 위치도

에 표시), 측정사진 반드시 첨부

4) 서울시 노면표시 시방 규정 적용. 끝

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	11/18 김권일
협조자
시행	도로보수과-11829	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/	arikdm@seoul.go.kr	/	대시민공개